정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

국립문화재연구소

자연문화재연구실

②담당자

(연락처)

조운연 실장

(042-610-7600)

이근영 사무관

(042-610-7611)

③정책사업명

천연기념물센터 수장고 및 연구동 증축공사

④선정기준

5억 이상 대규모 예산이 투입되는 사업

⑤사업기간

2014~2015년

⑥주요내용

□ 추진배경 : 자연유산의 훼손․멸실 증가에 대비한 유물․표본

자료수집 및 기존 수장 공간 포화에 따른 새로운               수장고와 실험․분석을 위한 연구동 마련

□ 사업기간 : 2014 ~ 2015년

□ 위 치 : 대전시 서구 유등로 927(천연기념물센터 부지 내)

□ 사업규모

○ 부지면적 : 22,942㎡(자연녹지지역)

○ 연 면 적 : 총6,800㎡(기존: 3,902㎡ / 증축: 2,918㎡)

○ 구    조 : 철근콘크리트조, 철골조(지하1층 / 지상3층)

□ 주요시설 : 수장고, 연구실, 동․식물증식연구실, 유물보존실 등

□ 총사업비 : 6,059백만원

○ 시설비 : 5,991백만원, 감리비 : 58백만원, 시설부대비 : 5백만원

총사업비	2014년(1차년도)	2015년(2차년도)	비고
6,059	2,874	2,718	장기계속공사

□ 추진상황 및 향후계획

○ 공사 및 감리용역 기본계획 수립 : ‘14.3.18

○ 조달청 계약 의뢰 : ‘14.3.26

○ 공사 및 용역 계약 체결(총 공사 및 1차년도 공사) : ‘14.5월

○ 공사 착공 : ‘14.5월

○ 1차년도 공사 및 용역 준공 : ‘14.12월

○ 2차년도 공사 및 용역 계약 : ‘15.1월

○ 2차년도 공사 및 용역 준공 : ‘15.10월