정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	궁능문화재과	②담당자 (전화번호)	조운연 과장 (042-481-4700) 정환진 주무관 (042-481-4774)
③정책사업명	경복궁 흥복전권역 복원정비 사업
④선정기준	5억 이상 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015.~2018.
⑥주요내용	□ 추진목적(또는 추진배경) ㅇ 일제에 의해 훼손·변형된 경복궁 원형복원을 위한 정비 사업 - 2011년부터 추진 중인 경복궁 제2차 복원정비 사업의 일환으로 소주방권역 복원공사에 이어 흥복전권역 복원공사 추진 ㅇ 조선 법궁으로서 위상 회복과 민족문화의 우수성 선양, 역사교육 및 문화관광자원으로 활용 □ 사업비 ㅇ 총 사업비 : 180억원(관급자재 및 감리비 등 포함) ㅇ 총 공사기간 : 2015.9.15.~2018.12.12.(1,096일) ㅇ 2017년 공사비 : 48억원 □ 주요 추진현황 ㅇ 2015. 9월 1차 복원공사착공 ㅇ 2015. 10월 기공식 행사 ㅇ 2016. 5월 1차 복원공사 준공 및 2차 복원공사 착공 ㅇ 2016. 12월 2차 복원공사 준공 ㅇ 2017. 1월 3차 복원공사 착공 □ 사업내용 ㅇ 건물 4동(흥복전, 동행각, 북행각, 서행각/564.65㎡), 복도각, 배수시설 등 복원 □ 세부추진계획 ㅇ 2017. 1월~12월 3차 복원공사 추진 ㅇ 2018. 3월~12월 4차 복원공사 추진 및 준공