과업 내용서

1. 과 업 명 : 고흥군 구암리 주상절리 분포지 지질조사

2. 과업목적

ㅇ 전남 고흥군 도화면 구암리 산23-2번지 일원의 석산개발 채석장에 발달하는 “주상절리 분포지”는 남해안 “다도해 해상국립공원”과 인접해 있으며, 국내 여러 지역의 현무암에서 나타나는 주상절리와 달리 유문암질 응회암에 나타나는 냉각절리로, 지질유산적 가치가 제기되고 있음

ㅇ 이 지역 주상절리의 보존 대책을 마련하기 위해서는 일차적으로 주상절리 분포지 일대의 지질분포 특성이 파악되어야 하며, 이를 바탕으로 주상절리의 분포 현황과 그 특성이 파악되어야 함

○ 따라서 주상절리 발달지역의 지질도 작성, 주상절리 발달 분포도 작성, 주상절리 유형 및 분포 특성 파악, 보존 대상 지역의 범위 등에 대한 예비적 판단 등의 기초조사를 수행하여, 이 지역 주상절리 분포지의 보존을 위한 바탕 자료로 활용하는 것이 본 용역의 목적임

3. 배경 및 필요성

ㅇ 국내에 분포하는 주상절리는 대부분 주로 해안가에 있으나 조사지역의 주상절리는 내륙에 분포하며, 그 규모 또한 높이 20~30m, 폭 100m로 수직형, 완만한 경사형, 수평형의 구조를 동시에 나타내고 있음

ㅇ 현재 골재 채취장 내에 발달한 주상절리 분포지는 굴착이 이루어지지 않고 있으나, 굴착이 이루어지고 있는 지역의 굴착심도가 깊어지면 주상절리가 나타날 가능성이 있음

ㅇ 따라서 보존가치를 지니는 주상절리 분포지가 채굴작업 과정에서 훼손되지 않도록 하기 위하여, 주상절리 분포 현황 조사가 필요함

4. 과업기간 : 착수일로부터 45일간

5. 소요예산 : 18,230천원

6. 과업범위 : 전남 고흥군 도화면 구암리 산23-2번지 일원

7. 조사 연구진(조사단) 구성

ㅇ 과업에 참여하는 연구진은 지질학 전반의 연구 분야에 대한 연구를 진행해 온 자로서 과업내용을 충실하게 수행할 수 있는 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여야 한다.

ㅇ 필요에 따라 연구원의 조사 활동을 보조할 수 있은 연구보조원을 둠

※ 과업에 투입된 조사원은 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우 발주처의 사전 승인 필요

8. 조사내용과 방법

1) 대상지역 일원의 지질도 및 주상절리 분포도 작성

ㅇ 문헌조사

- 정부기관 조사보고서(지질도폭 등), 학위논문, 학술논문(지질학회지, 암석학회지, 지구과학회지 등)등에 수록된 지질자료 수집

ㅇ 야외조사

- 대상지역 일원의 지질조사(암종구분, 지층경계, 지질구조)

- 대상지역 항공사진 촬영

- GPS와 위성사진을 이용한 대상지역 주상절리의 위치 정보 수집

- 주상절리 발달의 공간적 유형(수직형, 경사형, 수평형 등) 및 분포 파악

- 주상절리의 형태 분석(높이, 폭, 다각형의 수, 단면적, 최대직경 등)

ㅇ 실내분석

- 주상절리 발달 암종의 분석

- 주상절리의 분포도 작성 및 공간 D/B 구축

ㅇ 기타 자료해석

2) 채굴작업 지역에 대한 조사

ㅇ 추가노출 예상지역 파악

- 현재 채굴지역과 주상절리 발달 지역의 암종 비교 조사

- 암종 및 지질구조 경계 여부 조사

- 채굴지역 굴착심도에 따른 주상절리 발달 공간적 분포 파악 및 도면 작성

3) 주상절리 보존 대상지역 설정

ㅇ 상기 자료 종합분석으로부터 보존 대상지역의 공간적 구분 및 설정

ㅇ 작성된 결과를 검토하여, 보존지역, 활용가능지역, 완충지역 등에 대한 예비 설정

9. 과업수행 일반사항

ㅇ 과업 수행자는 계약체결 후 5일 이내에 다음 각 호의 사항을 제출

- 착수신고서

- 참여연구원 명단

- 과업 세부시행 계획서<보고회(자문회의) 1회 계획 포함>

- 예정 공정표

- 참여 연구원 보안유지 각서

- 소요예산 산출내역서

ㅇ 과업의 변경은 과업의 내용이 당초의 계획과 현저히 다른 경우로서 발주자가 판단하여 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우 변경 가능

ㅇ 본 과업내용서에 기술되어 있는 사항은 유동적일 수 있으며 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 일반적인 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 경미한 사항에 대해서는 상호 협의 하에 추진할 수 있음.

ㅇ 중대한 상황의 변경으로 과업의 변동이 불가피할 경우에는 발주자와 사전 협의하여 과업의 범위, 내용, 비용 및 기간 등을 변경 가능

ㅇ 조사․연구 기간 중 문화재청 직원이 조사과정을 확인할 수 있도록 조치하여야 하며, 과업 진행사항을 문화재청과 수시로 협의하고, 연구사항에 대한 중간보고회(자문회의)를 개최해야 함

ㅇ 과업 수행 중 의문사항이나 문제점이 있으면 감독관과 협의

ㅇ 과업수행을 위한 각종 법률의 허가는 과업수행자가 담당(문화재청과 협의 시행. 단, 문화재와 관련된 법률은 감독관이 담당).

ㅇ 보고서는 납품 5일 전에 과업수행내용에 대하여 문화재청 감독공무원의 사전 검토를 받은 후 인쇄 납품하여야 하고 사진첩은 보고서 납품시 제출(검토기간은 용역기간에 포함되는 것임).

ㅇ 현지조사를 위해 관계기관의 협조와 승인이 필요한 사항에 대해서는 사전에 조사기간, 조사자, 조사내용 등을 관련기관에 통보하여 협조 및 승인을 받아야 함

10. 보안사항

ㅇ 과업 수행 중 과업자료의 분실, 도난 및 누출을 방지하여야 함

ㅇ 자료의 철저한 보안을 위하여 별도의 보관함을 설치하고 관리책임자(정․부)를 지정․운영하며, 특히 개인용 PC 및 보조기억장치와 전산자료 등의 보안 관리에 철저를 기하여야 함

ㅇ 과업 수행 참여자에 대하여 보안 각서를 징구

ㅇ 문화재청과 사전 협의 없이 조사 성과 등에 대하여 대외에 발표하여서는 안되며 과업 수행과 관련한 각종 보안 사고에 대하여는 연구수행기관에서 모든 책임을 져야하며, 이에 상응하는 변상을 하여야 함

11. 성과품 내용

ㅇ 「고흥군 구암리 주상절리 분포 지질조사 보고서」는 납품 5일 전에 과업내용에 대하여 감독 공무원의 사전검토를 받은 후 과업완료일까지 납품(검토기간은 용역기간에 포함되는 것으로 봄)

ㅇ 현지조사 시 촬영 정리한 디지털 파일(디지털카메라)은 그 원판 전량을 조사보고서와 함께 제출

ㅇ 문화재청이 과업 성과품에 대하여 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후 라도 과업수행자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출하여야 함

12. 성과품 목록

ㅇ「고흥군 구암리 주상절리 분포 지질조사 보고서」A4 칼라 제본 : 20부

ㅇ 분포는 보고서 내에 쉽게 인지가 가능한 크기로 수록. 단 필요시 별도로 작성하여 제출할 수 있음

ㅇ 보고서 및 디지털사진(사진첩) 등 저장(CD) : 각 2부

- 용역 수행 중 촬영사진 원본파일

- 보고서 CD는 한글 또는 PDF파일로 제작

13. 저작권 관련 사항

ㅇ 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역    계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

ㅇ 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해 「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있음.