시    방    서

경복궁 주차장 주변 조경정비공사

2017. 2

목  차

0100 일반공통사항 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

0200 가설공사……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

0300 기초공사……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

0400 조경공사……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

0500 기타공사……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

0100 일반공통사항

0100 일반공통사항

0100 일반공통사항

0110 문화재수리원칙

ㄱ. 문화재수리는 다음 사항을 준수하고 원형유지를 원칙으로 한다.

① 기존의 양식으로 수리한다.

② 기존의 기법으로 수리한다.

③ 기존의 주변 환경도 보존한다.

ㄴ. 재료의 교체 또는 대체, 보강은 다음과 같은 경우에 적용한다.

① 기존의 재료를 그대로 두어 당해 문화재가 붕괴 또는 훼손될 우려가 있는 경우

② 보강하지 않으면 구조적으로 위험을 초래하거나 훼손될 우려가 있는 경우

③ 기존의 재료가 변경된 것이거나 당해 문화재의 양식에 맞지 않는 경우

ㄷ. 수리대상물은 수리 전의 상태와 사용재료에 대해 상세하게 기록하고, 수리절차와 처리방법을 구체적으로 기록한다.

ㄹ. 과거에 행해진 수리 중 역사적 증거물과 흔적은 모두 기록․보존하고, 훼손하거나 변형, 가식함은 물론, 하나라도 제외되지 않도록 한다.

ㅁ. 수리는 최소한으로 한다.

ㅂ. 모든 손질은 원형유지의 원칙을 준수하되, 수리방법에 있어서 원칙적으로 지켜야 할 사항은 다음과 같다.

① 과학적 보존처리는 필요할 때 언제나 처리 전 상태로 환원할 수 있는 방법으로 한다.

② 문화재에 간직된 모든 증거(역사적, 미술사적, 기술사적 등) 자료는 연구에 활용할 수 있도록 한다.

③ 손질이 필요할 때라도 색, 색조, 결, 외관과 짜임새 등이 조화되도록 한다.

④ 문화재는 문화재수리기술자, 기능자에 의하여 수리한다.

0120 공통사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사에 적용한다.

ㄴ. 본 시방은 공사시방서 작성준칙으로만 적용하고, 각각의 문화재수리공사는 표준시방서에 준하여 개별 문화재 특성에 맞게 공사시방서를 작성하여 시행한다.

ㄷ. 문화재수리표준시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다.

ㄹ. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 시방에 준한다.

ㅁ. 이 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 문화재청 관련 제 법규 및 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.

2. 쓰임말정리

ㄱ. ‘발주자’라 함은 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 시공자에게 도급을 주는 자

ㄴ. ‘시공자’라 함은 발주자로부터 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 도급받은 건설업자 또는 문화재보호법에 의해 수리공사가 허용된 자

ㄷ. ‘담당원’이라 함은 발주자에 의해 감독자 및 보조감독자로 임명된 자

ㄹ. ‘현장대리인’이라 함은 시공자가 지정한 공사현장에 상주하여 공사를 추진하는 문화재수리기술자 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 자

3. 담당원의 책무

ㄱ. 시공자 또는 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사결과는 모두 담당원의 권한과 책임으로 간주한다.

ㄴ. 담당원은 시공자 또는 현장대리인에 대한 중요한 지시 및 승인사항을 문서로 한다.

ㄷ. 담당원은 시공자가 관계 법령에 의해 공사를 원만히 수행할 수 있도록 협력한다.

ㄹ. 담당원은 당해 문화재의 수리를 위한 원형확인, 조사, 고증 등이 필요하다고 인정될 때에는 시공자, 현장대리인으로 하여금 현장 및 문헌조사 등을 실시하도록 할 수 있다.

ㅁ. 담당원은 ‘ㄹ’항과 관련하여 관계 법령에 따라 공사중지를 요청할 수 있으며, 현장조사 결과에 따라 현장지시, 설계변경 등을 시공자에게 요청할 수 있다. 이때, 시공자는 특별한 사유가 없는 한 담당원의 요청에 따라야 한다.

4. 시공자의 책무

ㄱ. 시공자는 문화재수리의 품질과 원형유지에 책임을 진다.

ㄴ. 시공자는 공사계약서, 설계도, 공사시방서 등에 의하여 성실히 시공하되, 담당원의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다.

ㄷ. 시공자는 현장대리인, 현장종사자, 실측조사를 위한 조사업무자 등이 수리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협조한다.

ㄹ. 시공자는 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로 하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다.

ㅁ. 시공자는 공사 기간 중에 당해 문화재의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.

5. 현장대리인의 책무

ㄱ. 현장대리인은 문화재수리의 품질과 원형유지에 책임을 다한다.

ㄴ. 현장대리인은 설계도서에 의하여 성실히 시공하되, 담당원과 협의 및 지시에 따른다.

ㄷ. 현장대리인은 수리에 관하여 시공자의 책임과 의무를 승계하고, 수리현장에서 발생하는 모든 사항에 대하여 일차적인 책임을 진다.

ㄹ. 현장대리인은 공사현장에 상주하여야 하며, 업무협의 등 불가피한 사정으로 현장을 이탈할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.

ㅁ. 현장대리인은 공사현장에 상주시 해당 자격증을 소지하여야 하며, 담당원의 제출 요구에 응하여야 한다.

ㅂ. 현장대리인은 수리현장의 안전을 위하여 사전에 필요한 조치를 취한다.

6. 설계도서의 우선순위

모든 설계도서는 상호 보완되어야 하며, 설계도서 사이에 모순점이 발생하는 경우에는 계약서 상의 ‘공사계약일반조건’에 따른다.

7. 공법 등의 결정

설계도서 상에 기재되지 않은 재료, 공사방법 등에 대하여 시공자는 담당원과 협의하여 결정한다.

8. 사전조사 및 검토

ㄱ. 시공자는 사전에 설계도서와 현장여건 등을 면밀히 조사․검토하여 시공계획에 반영한다. 이 경우 이의가 있을 때는 즉시 담당원에게 보고하고 지시에 따른다.

ㄴ. 기준점은 이동, 변형되지 않는 위치에 설치하여 공사 중 실측조사의 기준이 되게 하며, 훼손이나 파손되지 않도록 보호조치를 한다.

ㄷ. 설계도서와 현장상황을 대조하여 수리의 범위와 수리방법을 정하고, 설계시 보이지 않는 부분을 확인하기 위해 현장조사를 실시한다.

ㄹ. 당해 문화재의 창건․중건․수리․관리 등에 대한 역사, 문헌조사를 한다.

ㅁ. 실측조사와 병행하여 조사대상물에 대한 사진촬영과 기록도면을 작성한다. 사진과 기록도면은 보이는 각도가 같게 하여 쉽게 비교될 수 있도록 한다.

9. 경미한 변경

도급금액의 경미한 증감 및 공사 기간 내에 완료가 가능한 설계변경은 담당원과 협의하되, 증가되는 공사금액은 시공자 부담으로 할 수 있다.

10. 관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준 등을 준수하여 공사를 수행한다.

11. 수속

시공자는 시공상 필요한 일체의 수속을 시공자 부담으로 한다.

12. 보고 및 서류양식

ㄱ. 시공자는 설계도서 등에 지정한 사항과 담당원이 지시한 각종 보고 사항에 대해 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출한다.

ㄴ. 시공자는 제출할 서류의 형식과 내용 등이 따로 정해지지 않은 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

0130 현장관리

1. 문화재수리기술자․기능자 등의 배치

ㄱ. 시공자는 문화재수리를 담당하는 문화재수리기술자, 기능자를 배치하되, 기술자격을 증명하는 서류를 공사착공 전에 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

ㄴ. 담당원은 배치된 현장대리인, 기술자, 기능자가 공사관리, 문화재의 원형보존, 기타 문화재수리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 교체를 요구할 수 있다.

ㄷ. 현장대리인과 기술자, 기능자는 담당원의 승인없이 현장을 이탈해서는 아니된다.

2. 설계도서 등의 비치

공사현장에는 해당 공사에 관련된 ‘공사계약일반조건’ 상의 계약문서, 관계 법령, 공사예정공정표, 시공계획서, 현황사진첩, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 지정장소에 부착 또는 비치한다.

3. 용지 및 도로의 사용

시공자는 공사에 필요한 작업장, 용지 사용 등에 대하여는 관련기관 및 소유자와 협의하고 담당원의 승인을 받아야 한다. 이때, 원상복구는 공사 기간 내에 완료하고 제경비는 시공자가 부담한다.

4. 인접 문화재 및 유구의 보호

ㄱ. 시공자는 공사시행 중 인접 문화재의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의 우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고, 지시에 따른다.

ㄴ. 시공자는 공사시행에 있어 불필요한 터파기 등 지반을 절토해서는 아니된다. 단, 공사구간 내의 문화재수리에 필요한 유구확인을 위한 터파기 등을 하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행할 수 있다.

5. 공사안내판 및 표지설치

시공자는 공사안내판, 공사관련 안전표지판 등을 설치하되, 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원과 협의한다.

6. 공사현장관리 등

ㄱ. 시공자는 공사현장에서 관람객 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 유의한다.

ㄴ. 시공자는 현장작업자로 하여금 항상 단정한 복장으로 작업에 임하도록 하며 관람자에게 불쾌감을 주어서는 아니된다.

ㄷ. 시공자는 인접 시설물 및 수목 등이 손상되지 않도록 보호 및 보양시설을 한다.

ㄹ. 시공자는 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료 등을 정비․정돈하고, 공사장 내외의 정리․청소를 한다.

ㅁ. 시공자는 관람객의 안전과 관람편의를 위한 조치를 취한다.

7. 비상연락

ㄱ. 시공자는 현장조직체계 및 비상연락망을 구축하여 비상시 신속한 연락이 이루어지도록 한다.

ㄴ. 비상연락망에는 발주자, 지방자치단체, 병원, 경찰서, 소방서 등의 관공서와 담당원, 현장책임자, 현장작업원, 당직근무자 등의 연락처를 기재하도록 한다.

0140 재료관리

1. 일반사항

ㄱ. 교체되는 재료는 설계도서에 정한 것을 제외하고는 모두 신재를 사용한다.

ㄴ. 재료의 품질은 설계도서에 정한 품질로 하되, 정한 바가 없는 경우에는 기존 재료와 품질이 같거나 동등품 이상으로 한다.

2. 재료의 반입․반출

ㄱ. 현장에서 발생 및 반입된 재료는 담당원의 승인없이 일체 반출해서는 아니된다.

ㄴ. 재료의 반입은 담당원에게 문서로 보고하고, 담당원은 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인하며, 필요에 따라 증빙자료를 첨부하게 할 수 있다. 단, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을 받아 보고를 생략할 수 있다.

ㄷ. 재료는 담당원이 지정한 장소에 반입, 보관한다.

ㄹ. 현장에 반입된 재료 중에 변질 또는 훼손 등으로 공사에 사용할 수 없다고 판단된 재료는 담당원의 지시를 받아 즉시 장외로 반출한다.

3. 지급 재료

ㄱ. 지급 재료의 종류, 수량, 인도, 기타 조건은 설계도서에 의한다.

ㄴ. 지급 재료를 인수할 때는 담당원의 입회 하에 검수하고, 변질되지 않도록 안전한 장소에 보관한다.

ㄷ. 지급 재료는 소정의 목적 외에 사용해서는 아니된다.

ㄹ. 지급 재료를 사용할 경우에는 지정양식에 기록하고 담당원의 승인을 받는다.

ㅁ. 시공자는 지급 재료의 규격, 품질 등이 설계도서에 적합하지 아니한 경우에는 그 내용을 문서로 보고하고, 담당원의 지시를 받는다.

4. 해체 재료

ㄱ. 해체 재료는 재사용재와 불용재로 구분하여 담당원의 확인을 받은 후 지정장소에 보관한다.

ㄴ. 해체 재료는 공사 기간 중에 외부로 반출해서는 아니된다. 단, 불용재 중 담당원의 승인을 받은 재료는 공사 기간 중에라도 반출할 수 있다.

5. 재료의 검사 및 시험

5.1 검사 및 시험

ㄱ. 설계도서에 정한 재료 또는 담당원이 필요하다고 인정한 재료에 대하여는 소정의 검사 및 시험을 하여야 한다. 이때, 소요되는 제경비는 시공자가 부담한다.

ㄴ. 재료의 검사 및 시험에 대하여는 이 시방서와 한국산업규격(KS), 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서 등 제 규정에 의한다.

5.2 불합격 재료 처리

검사 및 시험에 불합격된 재료는 즉시 장외로 반출하고, 대체 재료를 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

0150 시공관리

1. 공사기간

ㄱ. 시공자는 계약서상에 정한 기간 내에 공사를 착수하고, 계약 기간 내에 공사를 완료한다.

ㄴ. 시공자는 각 공정의 시작 전과 완료 전에는 담당원에게 보고하고, 담당원의 지시에 따라 다음 공정을 추진한다.

2. 시공도 작성

ㄱ. 계약된 설계도서와는 별도로 시공상 필요한 설계도서는 지체없이 도급자가 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다. 또한, 담당원은 필요하다고 인정되는 부분에 대하여는 부분상세도 등을 작성하도록 할 수 있다.

ㄴ. 작성된 시공도는 준공도서에 포함한다.

3. 공법

문화재수리에 사용되는 모든 재료의 가공, 설치, 공작법 및 사용기구 등은 기존의 양식과 기법으로 한다. 단, 담당원의 승인을 받은 경우에는 기타 기법으로 할 수 있다.

4. 모형의 제작

모형의 제작은 설계도서에 따르되, 담당원과 협의한다.

0160 환경보호

1. 일반사항

ㄱ. 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 기타 환경관련 법령을 준수하여 시공에 따른 공해가 발생하지 않도록 한다.

ㄴ. 시공자는 환경보호 규정을 지키도록 현장 조사자에게 철저히 교육시키고, 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 한다.

ㄷ. 소음이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 소음방지시설을 설치하거나 작업시간을 정하여 사용한다.

2. 폐기물 처리

ㄱ. 폐기물 반출은 지정등록업체를 통해서 반출한다.

0170 안전관리 및 화재예방

1. 안전관리

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계 법령을 준수하고, 시공에 수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 한다.

2. 안전조치

ㄱ. 시공자는 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치를 취한다.

ㄴ. 공사현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히, 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.

ㄷ. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다.

ㄹ. 공사현장에 있어서는 항상 정리정돈을 하며, 특히, 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고방지에 노력한다.

ㅁ. 공사용 전력설비에 대하여는 특히, 안전보호시설을 설치한다.

3. 안전표지 및 안전보호

ㄱ. 공사현장에서는 적절한 개소마다 안전표지를 설치한다.

ㄴ. 공사현장에서는 작업자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하도록 한다.

4. 안전교육

시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시한다.

5. 안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 작업자에게 위험이 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있을 시에는 이를 반영한다.

6. 사고보고 및 응급조치

ㄱ. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다.

① 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

② 사상사고

③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

④ 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

ㄴ. 전 항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 한다.

7. 안전 및 보양시설

안전 및 보양시설과 가설시설물에는 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 조명, 가설울타리, 경비, 안전교육 등이 포함된다.

8. 재해방지

공사실시에 따른 재해방지는 건축법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법, 기타 관계 규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.

9. 화재예방

ㄱ. 공사장 내에서는 화기사용을 금한다. 단, 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방 조치를 취하고, 담당원의 승인을 받는다.

ㄴ. 공사장 내에서는 담당원이 지정하는 장소에 소화용기, 소화장비를 비치한다.

0180 수리보고 및 기록유지

1. 공사기록

공사 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 교체부재, 재료사용량, 시험성적 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 공사 준공과 동시에 담당원에게 제출한다.

2. 사진촬영

ㄱ. 공정별로 착공 전, 공사 중, 준공사진을 촬영하여 사진에 대한 설명을 기록하고 공사준공과 동시에 사진첩(필름 포함)을 작성하여 제출한다. 이때, 사진의 규격은 담당원의 지시에 따른다.

ㄴ. 사진촬영은 공사 전․후가 비교될 수 있도록 하고, 특히, 원형고증자료와 상량문, 묵서명 등은 별도 촬영한다.

3. 준공도면

ㄱ. 공사 준공 시 준공도면을 작성하여 담당원에게 제출한다.

ㄴ. 준공도면작성은 설계도서에 따른다.

4. 준공보고서

ㄱ. 준공보고서는 시공자가 작성하여 준공시 담당원에게 제출한다.

ㄴ. 준공보고서는 작성완료 전 담당원에게 검토를 받는다.

ㄷ. 준공보고서에는 다음 내용을 포함한다.

① 공사 전․중․후 사진

② 공사 착공 전 및 준공도면

③ 사용재료 및 수량

④ 공사관계자 등 인력현황

⑤ 기타 공사관련 내용

0190 기타

1. 제식전

ㄱ. 공사관련 행사는 담당원과 협의한다.

ㄴ. 행사를 위한 경비는 시공자가 부담한다.

2. 인도

공사가 준공되면 시공자는 다음의 서류 및 물품을 인도한다.

① 준공보고서

② 준공도면

③ 현황 및 공사진행 사진첩

④ 탑본자료 및 현장조사서

⑤ 기타 담당원이 지시하는 서류, 자료, 물품 등

0200 가설공사

0200 가설공사

0200 가설공사

0210 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 공통가설공사와 일반가설공사에 적용한다.

ㄴ. 이 시방에 정하지 아니한 가설공사에 대하여는 각 해당 공사의 시방에 따르고, 특수한 가설물의 설치가 필요한 경우에는 별도 설계에 의해 설치한다.

ㄷ. 가설공사를 위하여 변형한 토지 및 시설물 등의 원상복구는 시공자가 부담한다.

ㄹ. 이 시방에 정한 사항 이외의 재료 및 구조 등은 문화재청 관련 제 법규 및 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.

0220 가설물 설치

1. 가설시설물

1.1 공사안내판 설치

ㄱ. 공사안내판의 크기, 재료, 모양, 글씨, 문안, 설치장소 등은 사전에 담당원과 협의하여 승인을 받은 후 설치한다.

ㄴ. 공사안내판의 설치는 공사규모와 관계없이 설치한다.

ㄷ. 공사안내판에는 공사관계자의 실명과 연락처를 기재한다.

ㄹ. 공사안내판에는 관람객의 이해를 돕기 위하여 당해 문화재의 사진을 게시할 수 있다.

0230 철거․뒷정리

1. 일반사항

ㄱ. 가설시설물 철거 시 분진, 소음 등이 발생하지 않도록 조치를 취한 후 철거한다.

ㄴ. 철거 후 임시적치시간을 최소화하고 즉시 장외로 반출한다.

ㄷ. 철거된 현장은 현장정리를 조속히 하여 원상 복구한다.

ㄹ. 공사장 내에 쓰레기나 폐자재를 방치하지 않도록 하고, 공사수행이 원활할 수 있도록 항상 정리정돈상태를 유지한다.

ㅁ. 공사 시 발생한 폐자재는 즉시 반출한다.

ㅂ. 수리공사 중 발생하는 폐자재는 반드시 역사적 가치가 있는 자재의 유무를 확인한 후 반출한다.

2. 철거․뒷정리

ㄱ. 공사 기간 중 담당원이 공사 진행상 또는 대지 내의 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는 전부를 신속히 철거 또는 장외로 반출한다.

ㄴ. 담당원의 지시에 따라 공사완료시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 땅고르기 및 청소 등의 뒷정리를 한다.

ㄷ. 가설물의 해체, 철거는 가설물 철거계획에 따라 가설물이 불안정하게 되지 않도록 작업순서를 정하여 실시하며, 도괴, 낙하, 추락 등을 방지하기 위한 조치를 취한다.

0300 기초공사

0300 기초공사

0300 기초공사

0310 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 기초공사에 적용한다.

ㄴ. 기초공사라 함은 토공사, 지정공사를 말한다.

2. 쓰임말정리

ㄱ. 기초 : 건축물의 자중, 적재하중, 풍력, 지진력, 기타 외력을 받아 이것을 지반에 전달하는 하부 지중구조부분

ㄴ. 지정 : 기초를 보강하거나 지반의 지지력을 증가시키기 위한 지반보강방법. 나무말뚝지정, 모래지정, 잡석지정, 판축지정 등

3. 연장

ㄱ. 연장 및 장비는 전통의 것을 사용한다. 단, 현대적인 연장 및 장비의 사용이 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

0320 시공

1. 토공사

1.1 대지정리

ㄱ. 공사에 영향을 미치는 수목 가운데 보존가치가 있는 수목은 보존(가지치기 포함) 또는 이식하고 불필요한 수목은 제거한다.

ㄴ. 유적지 내의 유구는 임의로 이동하지 않도록 한다.

ㄷ. 공사 중 손상 또는 훼손 우려가 있는 인접 문화재는 담당원과 협의하여 안전조치를 취한다.

1.2 터파기

ㄱ. 매장문화재의 분포가 예상되는 지역의 터파기는 담당원의 지시에 따른다.

ㄴ. 터파기 중 유구가 노출되거나 유물 등이 출토될 경우에는 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.

ㄷ. 굴착사면의 붕괴 우려가 있을 때에는 담당원의 지시에 따라 비탈지우거나 흙막이를 한다.

ㄹ. 터파기시 인접된 유구 및 구조물의 훼손방지시설을 별도로 하고 위험이 예상되는 경우에는 보강한다.

ㅁ. 터파기 주변은 안전사고에 대비하여 필요한 안전시설물을 설치한다.

1.3 굴착사면

ㄱ. 사면의 경사 및 높이는 토질, 지하수, 주변의 상황을 고려하여 결정한다.

ㄴ. 사면의 일부로부터 지하수가 유출되는 경우에는 여과층을 설치하여 토사의 유출을 막고, 사면에 영향을 미치지 않는 위치까지 배수시설을 설치하여 배수한다.

ㄷ. 터파기시 외부로부터 물이 유입되는 것을 방지하고 유입된 물은 즉시 배수한다.

ㄹ. 사면의 존치 기간 중에는 육안관측 및 계측을 철저히 하며, 이상이 생겼을 때는 신속하게 조치하고 담당원에게 보고한다.

1.4 기초바닥고르기

ㄱ. 기초바닥은 자연지반과 동등하거나 그 이상의 지내력을 갖도록 충분히 다짐을 한다.

ㄴ. 기초바닥은 생토면이 나타나거나 동결심도 이하로 한다.

ㄷ. 기초바닥고르기가 완료된 후에는 빠른 시일 내에 후속공정을 착수하고 그렇지 못할 경우에는 눈, 비 등으로 인한 지내력 저하 방지를 위하여 비닐 등을 덮어 보양한다.

ㄹ. 기초바닥고르기는 달고를 사용하여 인력으로 한다. 단, 유적 및 인접 문화재의 보존에 영향을 미치지 않는 경우에는 담당원의 승인을 받아 현대적인 장비를 사용할 수 있다.

1.5 되메우기 ․ 흙돋우기

ㄱ. 되메우기에 앞서 되메우기 할 부분의 고인물, 쓰레기 등의 이물질을 제거한다.

ㄴ. 되메우기 및 흙 돋우기 방법은 한 켜(150～250㎜)씩 다져 쌓으며, 특별한 사항은 설계도서에 따른다.

ㄷ. 되메우기 및 흙 돋우기 흙은 잡티가 섞이지 않은 고운 흙을 사용하고 특별한 사항은 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 터파기한 흙을 체가름하여 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거하여 사용한다.

1.6 잔토처리

ㄱ. 터파기한 흙은 되메우기 및 흙돋우기에 사용하고 잔토는 담당원의 지시에 따라 처리한다.

ㄴ. 적재 장비 및 잔토운반용 차량 등의 공사장 출입시는 주변 시설물과 유구 등에 지장이 없도록 한다.

2. 지정공사

2.1 일반사항

ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 지정은 해체하지 않는다.

ㄴ. 기존 구조물의 지정을 보강하거나 재시공할 때는 당해 문화재의 지정기법을 조사하여 반영한다.

ㄷ. 지정의 다짐 및 설치는 기존 기법으로 하되, 불가피하게 기계장비 등을 사용할 경우에는 소음, 진동, 인접구조물 및 시설물 등에 영향이 없도록 하고 작업 전 모든 조치를 취하여 담당원의 승인을 받도록 한다.

0500 목공사

0500 목공사

0300 기초공사

0400 석공사

0400 조경공사

0400 조경공사

0400 조경공사

0410 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재 및 이에 준하는 지역의 조경공사에 적용한다.

ㄴ. 조경공사라 함은 기반조성, 포장, 수목 식재 및 관리 등을 설치하는 것을 말한다.

ㄷ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘건설교통부 제정 조경공사표준시방서’에 준한다.

0420 재료

1. 수목

ㄱ. 수목은 설계도서의 지정 규격에 적합한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지한다.

ㄴ. 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지한다.

ㄷ. 수목은 향토수종으로서 역사성, 조화성이 있는 수종을 식재한다.

ㄹ. 수목은 수종 및 성상에 따라 철저히 검사하고, 담당원이 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거 전의 규격을 확인할 수 있도록 사진 등을 촬영한다.

ㅁ. 수형은 자연적으로 자란 수목의 형태를 유지하며, 모양을 내기 위하여 임의로 전정을 해서는 아니된다.

0430 조사

ㄱ. 착공 전에 해당 지역의 건물, 배수로, 축대 등 기존 시설물에 대한 현황을 조사하여 설계도서와 비교․검토

ㄴ. 기존 수목 및 지피식물의 현황, 생육상태, 주변 환경 등 조사

ㄷ. 수목식재지역 등 터파기 할 조경지역은 사전에 매장유구의 존재 유무 등 조사

ㄹ. 기존 수목 중 존치수목 및 제거수목, 이식수목 등 조사 표식

ㅁ. 문헌기록과 설계도서가 다를 경우에는 담당원과 협의하여 설계도서 수정

0440 공사 중의 수목보호

1. 기존 조경보호

ㄱ. 기존 조경부분은 보존하고 공사 중 손상되지 않도록 보호한다.

ㄴ. 공사 중 이식이 불가피한 수목은 기존 위치를 표시하고 적정 위치에 가식하여 전정, 증산억제재처리 등으로 보호한다.

0450 시공

1. 일반사항

ㄱ. 배식은 설계도서에 따르되, 문화재의 성격, 좌향, 지형의 고저 등을 검토하고 담당원과 협의하여 배식한다.

ㄴ. 건물의 기단 밑이나 마당 중심부 등에 있는 전통조경에 맞지 않는 수목 및 시설물 등은 제거한다.

ㄷ. 건물기단, 성벽, 탑, 축대 등의 인접지역에 있는 수목 중 문화재를 훼손시킬 우려가 있는 수목은 이식 또는 제거할 수 있다.

2. 이식 및 고사식물의 하자보수

ㄱ. 수목은 수관부 가지의 약 2/3 이상이 고사하는 경우에 고사목으로 판정하고 지피・초화류는 해당 공사의 목적에 부합되는가를 기준으로 감독자의 육안검사 결과에 따라 고사여부를 판정한다.

ㄴ. 고사여부는 감독자와 수급인이 함께 입회한 자리에서 판정한다.

ㄷ. 하자보수식재는 하자가 확인된 차기의 식재적기 만료일 전까지 이행하고 식재종료 후 검수를 받아야 한다. 이때 하자보수 의무의 판단은 고사확인 시점을 기준으로 한다.

ㄹ. 하자보수시의 식재수목규격은 원설계규격 이상으로 한다.

ㅁ. 하자보수의 대상이 되는 식물은 수목이나 지피류, 숙근류 등의 다년생 초화류로서 식재된 상태로 고사한 경우에 한한다.

ㅂ. 하자보수의 면제

① 전쟁, 내란, 폭풍 등에 준하는 사태

② 천재지변(폭풍, 홍수, 지진 등)과 이의 여파에 의한 경우

③ 화재, 낙뢰, 파열, 폭발 등에 의한 고사

④ 준공 후 유지관리를 지급하지 않은 상태에서 혹한, 혹서, 가뭄, 염해(염화칼슘) 등에 의한 고사

⑤ 인위적인 원인으로 인한 고사(교통사고, 동물의 침입 등)

ㅅ. 지급품을 식재하는 경우, 법정하자보수기간 내에 고사목이 발생하면 발주자와 수급인이 별도 합의하지 않는 한 수급인은 다음의 기준에 따라 보수한다. 이 경우에도 수목의 고사여부는 발주자와 수급인 쌍방이 입회하여 판정한다.

고사기준율(수종별,규격별,수량대비)	보수의무
10% 미만	전량 하자보수 면제
10%이상~20%미만	10%이상의 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10~20%의 분량은 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 수급인이 동일규격 이상의 수목으로 보수

2. 수목식재

2.1 수목검사

ㄱ. 현장에 반입되는 수목은 생육상태, 설계규격 등에 적합한 양질의 것을 반입하여 검사를 받아야 하며, 필요시 담당원은 수목 반입 전에 현지를 확인할 수 있다.

ㄴ. 현지에서 검사에 합격한 수목일지라도 운반과정에서 훼손 등이 발생한 경우에는 합격품으로 인정하지 않으며, 인수하지 않는다.

2.2 수목배식

ㄱ. 집암거수로 위에는 수목을 식재하지 아니한다.

ㄴ. 수목은 주변 경관에 부합되도록 자연스럽게 배치한다.

2.3 식재시기

수목의 식재시기는 수목의 활착이 어려운 하절기와 동절기를 피하되, 불가피하게 식재할 경우에는 이에 따른 보호조치를 한다.

2.4 굴취

2.4.1 가지주

수고 4.5m 이상의 수목에 대하여 굴착 시 쓰러질 우려가 있는 경우에는 굴취 전에 가지주를 세운다. 특히, 문화재 등에 인접하여 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 반드시 가지주를 세워 안전조치 후 굴취한다.

2.4.2 분의 크기

뿌리분의 크기는 수종에 따라 다르나, 대체로 해당 근원직경의 4～5배 이상으로 하며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위까지 한다.

2.4.3 분의 모양

ㄱ. 뿌리분의 둘레는 원형, 옆면은 수직, 밑면은 둥글게 다듬는다.

ㄴ. 심근성 수종은 조개분, 천근성 수종은 접시분의 형태로 만들고 일반적인 나무는 보통분의 형태로 만든다.

2.4.4 뿌리의 정리

ㄱ. 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며, 세근이 밀생한 부분은 가급적 이를 뿌리분에 붙여 보존한다.

ㄴ. 절단된 뿌리부분은 일그러지거나 깨지지 않도록 하며, 잘린 부분은 칼로 절단하고 도포제 등으로 처리한다.

2.4.5 분뜨기

ㄱ. 뿌리분 주위를 파내려 갈 때에는 지표에 대해 수직으로 파내려 가며, 뿌리가 나타날 때 굵은 것은 톱으로, 가는 것은 전정 가위로 깨끗이 잘라가면서 점차 깊이 파내려 간다.

ㄴ. 필요한 뿌리분의 깊이를 1/2정도 파내려간 단계에서 흙이 무너지지 않도록 새끼로 뿌리분의 허리를 단단히 감아준다.

ㄷ. 나머지 부분도 이와 같은 방법으로 작업을 하며, 곁뿌리를 잘라 곧은 뿌리만 남겨두고 새끼를 밑바닥으로 돌려 상하 방향으로 비스듬히 감은 후 마지막으로 곧은 뿌리를 자른다.

ㄹ. 분뜨기 과정에서 유구가 발견된 경우에는 담당원과 협의하여 적절한 보존조치를 강구한 후 뿌리 제거 등의 작업을 진행한다.

2.5 운반

2.5.1 결박

가지는 간편하게 결박하되, 뿌리감기는 주의를 기울여 면밀하게 감아준다.

2.5.2 수목의 상․하차

ㄱ. 수목의 상․하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용한다.

ㄴ. 수목의 적재 시 수피의 손상을 방지하기 위하여 줄기에 새끼나 가마니를 감는 등의 적절한 조치를 취하며, 크레인을 사용할 때에는 줄기가 손상되지 않도록 보호조치한 후 들어올린다.

2.5.3 운반

ㄱ. 차량의 용량과 수목의 수형에 따라 적정수량을 적재한다.

ㄴ. 뿌리분이 충격을 받지 않도록 완충재료인 흙 또는 가마니, 짚 등을 깐다.

ㄷ. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

2.6 전정(가지치기)

전정의 목적은 수형을 유지 또는 보존하기 위한 것으로 가지를 정리하는데 있으며, 이식 시에는 뿌리의 절근상태, 이식 후의 발육 등을 예상하여 전정작업을 한다.

2.6.1 작업순서

작업은 다음과 같은 원칙에 따라야 하며, 원줄기나 원가지를 절단하여 수형을 변형시키지 않도록 한다.

ㄱ. 고사지, 병든 가지, 부러진 가지, 서로 교차하는 가지, 맹아지는 제거한다.

ㄴ. 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

ㄷ. 수목 고유의 수형이나 이식 전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

2.6.2 수관 전정의 범위

전체 수형에 대해서 10～20% 범위로 하며 이 범위를 벗어나는 전정이 필요할 때에는 담당원의 승인을 받아 시행한다.

2.7 식재

2.7.1 식재순서

① 식재할 구덩이를 뿌리분 크기의 1.5배 이상으로 판다.

② 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다.

③ 수목의 뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣고 수형을 살펴 수목의 방향을 조정한다.

④ 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다.

⑤ 뿌리분 결속재 중 부식되지 않는 고무바 등은 반드시 제거한 후 식재한다.

⑥ 물을 충분히 붓고 각목이나 삽으로 휘저어 섞어 흙이 뿌리분에 밀착되도록 한다.

⑦ 나머지 흙을 채운 다음 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 한다.

⑧ 지면을 고른 후 수관폭의 1/3 정도 위치에 높이 100㎜의 물받이를 만든 다음 주변을 정리한다.

2.7.2 식재깊이

식재 시 수목의 근원부가 묻히는 부위는 굴취 전에 묻혔던 부위와 같아야 하며, 배수가 불량한 토질에서는 다소 높게 올려 심고 그 주위에 복토를 하여 표면배수가 잘 되도록 한다.

2.7.3 식재방향

이식 후의 방향은 이식 전의 방향과 동일하게 식재하되, 수목의 조건에 따라 생육이 부진한 편을 남향으로 식재할 수 있다.

2.8 지주목의 설치

ㄱ. 지주를 설치할 때에는 바람에 움직이거나 쓰러지는 일이 없도록 튼튼하게 세운다

ㄴ. 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 완충재를 수간에 대주어 수목 수피의 손상을 방지한다.

ㄷ. 지주목의 설치 시 지주의 경사각은 70˚를 표준으로 한다.

2.9 수목시비

시비는 식재와 동시에 시행하며, 적용비료 및 시비량은 설계도서에 따른다.

2.10 물주기

식재 후 관수는 수목이 활착할 때까지 실시하며, 구름 낀 날 외에는 일출․일몰시 실시한다.

3. 유지관리

ㄱ. 수목은 고사되지 않도록 배수처리, 병충해 방지, 월동대비 등의 보호조치를 한다.

ㄴ. 수목은 생물이므로 시공 전, 시공 중, 준공 후 일정 기간 유지관리함으로써 하자가 발생되지 않도록 한다.

ㄷ. 작업공정은 전정, 잔디깍기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방재, 관수 및 배수, 지주목재결속, 월동작업 및 기반시설물관리 등을 말한다.

ㄹ. 유지관리는 유지관리공사가 별도로 책정되었을 경우에 적용한다.

0500 기타공사

0500 기타공사

0500 기타공사

0510 목재울타리 철거공사

1. 일반사항

ㄱ. 계약자는 설계도서 및 지시에 따라 구조물이나 지장물의 철거 및 이설작업을 수행하여야 하며, 보존하도록 지정된 것은 유해한 손상을 입히지 않도록 주의하여 담당원이 지시하는 장소로 옮겨야 한다.

ㄴ. 사용 중인 암거 및 배수시설 등은 적당한 대체시설을 설치하여 통행 및 이용에 불편이 없도록 조치한 후에 철거하여야 한다.

ㄷ. 제거작업에 진동시설이 필요한 경우에는 영향권내의 구조물을 고려하여 작업에 의한 영향을 면밀히 검토하고 담당원의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

ㄹ. 철거작업으로 발생된 웅덩이, 도랑, 구멍 등은 주변지반의 높이까지 되메운 후 소정의 기준에 따라 다져야 한다.

ㅁ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘조경공사표준시방서’에 준한다.

2. 시공

ㄱ. 기존 울타리를 철거할때에는 주변의 수목등에 영향이 미치지 않도록 주의한다.

ㄴ. 철거한 목재울타리는 재사용하고, 로프는 폐기처리한다.

ㄷ. 철거한 이후 주변을 정리한다.

0520 식재지조성

1. 식재지 정리

ㄱ. 대상지는 지하구조물이 있는 지대로서 지하구조물 위 상층의 식재면조성을 위하여 시행한다.

ㄴ. 하부구조에 무리되지 않도록 토양을 돋아 식재지를 조성한다.

ㄷ. 대상지의 토양이 식재 수목에 적합한 토양인지 확인하고, 필요시에는 토양검사를 통해 적합한 식재기반 조성 후 식재할수 있도록 한다.

2. 식재

ㄱ. 해당지역의 경관을 고려하여 경복궁의 분위기에 적합한 수종을 선정한다.

ㄴ. 수종선정 시 기존 식생에 가장 유사한 수종과 전통수종을 선정한다.

ㄷ. 식재시 경복궁의 가시성을 판단하고 하부에 위치한 구조물과의 영향을 고려하여 배식하도록 한다.

0600 특기시방서

0600 특기시방서

0600 특기시방서

0610 정비공사

1. 기본방향

ㄱ. 조선의 정궁 경복궁 주변의 경관을 개선하여 국내외 관람객들에게 보다 나은 관람환경을 제공한다.

ㄴ. 사업대상지인 동측 주차장과 서측 주차장은 향후 10년이상 복원계획이 없는 공간으로 관람환경개선을 목적으로 한다.

ㄷ. 경복궁 주차장 주변(동측 주차장, 서측 주차장)의 기존보도를 일부 철거하여 조경공간을 확보한다.

ㄹ. 식재수종은 경복궁에 어울리는 전통수종을 우선으로 하며, 장소성에 알맞은 수종으로 고려한다.

ㅁ. 서측 주차장의 염료식물원은 기존 수목을 개방감있게 정리한다.

2. 정비방안

2.1 세부정비계획

2.1.1 동측 주차장

ㄱ. 보도블럭을 철거하여 보도를 축소하고 조경공간을 확대한다.

ㄴ. 철거되는 경계석은 한곳에 모아 따로 보관하여 경계석 시공 시 재사용하도록 하고, 일부 신규경계석은 기존 경계석과 이질감이 없도록 한다.

ㄷ. 마운딩이 조성되는 일부구간은 조성 시 부등침하가 발생하지 않도록 소정의 다짐을 실시한다.

ㄹ. 마운딩 형태는 설계도면에 따라 최대한 자연스러운 경관이 나타날 수 있도록 완만한 구릉을 조성하는 것을 원칙으로 한다.

ㅁ. 어구추정주변 조경공간은 어구주변 수종으로 식재하되 어구추정위치에는 식재를 지양한다.

ㅂ. 평상을 철거하고 평의자를 배치하여 관람객의 편의를 도모하고, 신설되는 평의자는 기존 평의자와 형태가 같도록 한다.

ㅅ. 녹지조성으로 방향안내판을 이설한다.

ㅇ. 제거되는 수목의 폐처리는 자체적으로 처리하도록 하며, 감독관과의 협의를 요한다.

ㅈ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘조경공사표준시방서’에 준한다.

2.1.2 서측 주차장

ㄱ. 보도블럭을 철거하여 보도를 축소하고 조경공간을 확대한다.

ㄴ. 철거되는 경계석은 한곳에 모아 따로 보관하여 경계석 시공 시 재사용하도록 하고, 일부 신규경계석은 기존 경계석과 이질감이 없도록 한다.

ㄷ. 은행나무 아래 평의자에는 눕기방지철물을 시공하여 관람자와 이용자의 편의를 도모한다.

ㄹ. 녹지조성으로 낮아지는 집수정의 덮개를 이설한다.

ㅁ. 녹지조성으로 북관대첩비의 관람 동선이 단절되므로 기존의 화강석 디딤석포장으로 단절된 동선을 조성한다.

ㅂ. 북관대첩비 안내판을 이설한다.

ㅅ. 기존 가림막 대신 설치되는 판장은 녹지가 조성되어있는 13m에만 적용한다.

ㅇ. 제거되는 수목의 폐처리는 자체적으로 처리하도록 하며, 감독관과의 협의를 요한다.

3. 유지관리

ㄱ. 주기적으로 수목의 생육상태에 따라 벌목 및 가지치기를 실시하여 수형을 유지하도록 한다.

ㄴ. 식재된 수목의 수형은 수시로 관리하여 경복궁과의 조화로운 경관을 이룰 수 있도록 한다.