- 목 차 -

1.  설   계   설  명  서

2.  일   반   시  방  서

3.  특   기   시  방  서

4.  내       역       서

1. 공 사 명 : 사직단 관리사무소 건립 공사(소방)

2. 위    치 : 사적 제 121호 < 서울특별시 종로구 사직동 소재>

3. 목    적

본 공사는 사직단 관리사무소 건립으로 소화시설 설치사업이 필요함에 따라 화재안전기준을 적용 하여 사용자에게 안전한 환경     을 조성하는데 그 목적이있음.

4. 공사개요

1) 비상경보 설비 공사             : 1식

2) 소방간선 설비 공사             : 1식

3) 유도등 설비   공사             : 1식

4) 연결살수설비  공사             : 1식

5. 공사기간

: 본 공사의 총 제작 및 설치기산은 착공일로부터 365일이며, 다음과 같은 사항이 발생할 경우 발주처의 승인을 얻어 공사기간       을 연기 할 수 있다.

1) 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업 불가 일수가 발생할 경우.

2) 공사시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동 등으로 공사기간의 연장이 불가피 할때.

3) 시행처의 부득이한 사정으로 공사중지 또는 연기가 필요할 때.

6. 예정공정표

공사기간 세부공정	공 사 기 간(365일)																										비 고
	착공	15일	30일	45일	60일	75일	90일	105일	120일	135일	150일	165일	180 일	195일	210 일	225 일	240일	255일	270일	285일	300일	315 일	330일	345일	360 일	준공
착 공
비상경보설비
옥외간선 설비공사
연결살수설비공사
유도등 설비공사
소화설비공사(소화기)
시험 및 검사
청소 및 정리
준 공

목    차

1. 적용범위

2. 공사 완성의 의무

3. 감독원

4. 현장 책임자

5. 공정 및 시공계획서

6. 사용재료 및 기기

7. 자재의 검사 및 시험

8. 사고 및 재해방지 대책

9. 공사의 일반사항

10. 입회검사

11. 이의 발생

12. 제작도 및 시공도

13. 공사의 중지

14. 시설물의 손상보수

15. 제출도서

1. 적용범위

1.1 본 시방서는 사직단 관리사무소 건립 소방공사의 일반사항에 대하여 적용하며, 특기시방서 및 도면에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 본 시방서에 준한다.

1.2 본 공사의 시공시 적용하여야 할 규정은 다음과 같다.

1) 전기 사업법 동시행령 및 시행규칙

2) 소방 공사업법 동시행령 및 시행규칙

3) 전기설비 기술기준령 및 시행규칙

4) 내선규정 및 배전규정

5) 전기용품 안전관리법

6) 한국산업표준(K.S)

7) 한국전력공사 전기공급 규정

8) 소방법, 동시행령 및 시행규칙

9) 전기통신법, 동시행령 및 시행규칙

10) 전기통신 공사업법, 동시행령 및 시행규칙

11) 도로법, 도로교통법

12) 근로기준법 및 관계법령

13) 토목공사 일반시방서, 콘크리트 표준시방서(건설부제정)

14) 건축관계법규 및 항공관계법규

15) 관계시, 도의조례

16) 기타 관계법령

1.3 법규의 우선순위

본 설계도서에 명기된 것 중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해 우선 적용하며 기타는 감독원의 유권해석에 따르고 공사 기간 중 법령이 개정된 경우 개정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

1) 관계 제 법령 및 법규

2) 계약서의 기술부문 계약조건

3) 시방서

4) 설계도면

5) 내역서

2. 공사 완성의 의무

수급자는 공사계약 내용에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 설계서 및 도면에 명시되지 않은 사항이라도 공사시공상 필요시에는 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며 공사시행에 있어 설계대로 시공하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아 시행하여야 한다.

3. 감독원

본 시방서에 감독원이라함은 발주자가 지정한 기술직원 또는 감리원을 말하며 시공자의 현장대리인에 대한 감독원의 지시와 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한 및 책임으로 간주한다. 이때 감독원의 중요한 지시 및 승인사항은 문서로 한다.

4. 현장책임자

수급자는 당해 공사에 해당하는 기술면허 소지자를 현장대리인으로 선임하여 공사현장에 상주케 하며 공사현장을 관리하여 관계서류의 작성과 준공검사 입회 및 시운전 입회책임을 진다.

5. 공정 및 시공계획서

5.1 수급자는 공사시공 전에 예정공정표 및 세부 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 공정을 충실히 관리하여야 한다.

5.2 전항의 변경이 필요할 경우 그 사유 및 증빙서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

5.3 수급자의 불안전한 시공 및 공사를 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때 에는 감독원은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 감독원의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법의 변경을 할 수 있다.

6. 사용재료 및 기기

6.1 품질

공사에 사용하는 재료는 한국산업규격품(K.S)을 우선 사용하고, 규격품이 없을 때에는 형식승인품을 사용한다.

재질은 반드시 우수한 신품이어야 하며 반입되는 기기 및 재료는 사전에 감독원의 승인 및 검사를 받은 후 사용하여야 한다.

6.2 전항에 의하여 불합격한 자재는 즉시 장외로 반출해야 하며 합격된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 발생하여 불량품으로 인정할 때에는 이를 사용하지 않아야 한다.

7. 자재의 검사 및 시험

7.1 수급자가 반입하는 자재에 대하여 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있으며 이에 소요되는 제반비용은 수급자가 부담한다.

7.2 공사에 소요되는 자재 및 기기는 설명서 견본 등 기술적인 자료를 구비하여 제출하며 감독원의 외관 및 구조검사를 받아 합격하여야 한다.

7.3 검사에 불합격한 자재는 즉시 현장외부로 반출하여야 한다.

7.4 본 시방서에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 현장에 반입하고 제작자 자체시험 품목은 현장반입 후 감독원의 임의 채취하여 시험하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

7.5 본 시방 또는 특기사항에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려울시는 현장감독원은 기자재의 시험을 명할 수 있다.

7.6 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될시는 감독원은 공인기관에 시험요청할 수 있다.

8. 사고 및 재해방지 대책

8.1 본 공사 착공 시 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

8.2 수급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 타 시설물에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

8.3 수급자는 시공중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제이행 사항을 충실히 지키도록 종사원에게 교육시켜야 하고, 시공 중 발생하는 안전사고에 대하여는 수급자가 책임을 져야 한다.

8.4 수급자는 사고발생시 대책 및 연락부서(공사, 감리단, 경찰서, 병원, 소방서) 연락방법을 제출하고 종사원에게 주지시킴은 물론 작업장에서 쉽게 볼 수 있도록 게시하여야 한다.

8.5 수급자는 본 공사를 시공함에 있어 전문공사 또는 제조업체와의 하도급이 필요한 경우에는 정부예산회계법에 의한 하도급 계약을 체결후 시행하여야 한다.

9. 공사의 일반사항

9.1 제 수 속

수급자는 본 공사 시행에 필요한 인허가 신고, 전기수용 신청, 전기사용전 검사 및 공인기관 요청검사 등은 공사를 대행하여 수급자 부담으로 필하여야 한다.

9.2 공사시행전 본 공사의 설계내용과 현장여건을 숙지한 후 관련공사의 공정에 맞추어 시행함은 물론 기설치물에 대하여는 손상이 없도록 한다.

9.3 공사보고

현장일지 및 자재수불, 기타 공사 공정등은 매일 보고하여 감독원의 지시를 받아야 한다.

9.4 공사일보 및 공사사진

1) 공사의 진행, 자재사용 내역등 필요한 사항을 기재한 공사일보를 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 공사사진

수급자는 착공부터 준공까지 본 공사에 관련된 중요공정에서의 사진을 촬영, 준공시 앨범을 작성 제출하여야 한다. 단, 공사금액의 청구시는 공정별 사진을 별도로 작성 제출하여야 한다. 특히, 감독원이 필요하다고 인정하는 경우와 시공후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곤란한 부분은 사진(칼라) 촬영을 하여 사진첩을 만들어 감독원에게 제출하여야 한다.

9.5 마무리 청소 및 원상복구

공사완료후는 건물내외의 정리정돈 및 청소를 완전히 하여 공사준공시 타시설물의 변경 손상부분은 원상복구하여야 한다.

9.6 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법등 제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

9.7 화기를 사용하는 장소, 인화성재료의 저장소등은 될 수 있는한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

9.8 본 공사에 소요되는 용수 및 전력은 수급자 부담으로 한다.

10. 입회검사

수급자는 본 공사중 아래와 같은 공사를 시공할 때에는 감독원의 입회검사를 받아야 한다.

1) 준공후 외부에서 점검하기 곤란한 작업

2) 케이블 단말처리 및 직선접속

3) 공사재료의 조합 또는 시험

4) 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항

11. 이의 발생

본 공사를 시행함에 있어서 공사기준과 도면 및 시방서의 내용에 상이점이 있을때, 계약내용과 상반될 때, 명기가 불명할 때, 기타 해석상 의문점이 생겼을 때에는 감독원과 협의하여야 한다. 이 경우 경미한 사항일지라도 문서로 하여 감독원의 지시 및 승인에 대한 날인을 받아야 한다.

12. 제작도 및 시공도

수급자는 제작 또는 시공상 필요한 도면은 지체없이 작성하여 감독원의 승인을 받아 시행한다.

13. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공정시행의 불가능, 공사의 부실 내지 조잡시공을 하거나 제 지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실 할 시에는 공사의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있다. 이 경우 수급자는 여하한 이의신청이나 손해배상을 요구할 수 없다.

14. 시설물의 손상보수

각 공사별로 명시된 것 이외는 인접건물, 주변도로, 기타에 손상을 주지 않도록 한다. 만약, 손상을 입혔을 때에는 감독원의 지시에 따라 동일한 재료로서 조속히 보수하여야 하며 이때의 제반경비는 모두 수급자의 부담으로 한다.

15. 제출도서

1) 세부 시공계획서	: 착공후 30일 이내

2) 월간공정보고서	: 매월 30일까지

3) 공사일보	: 익일 09:30(감독원에게)

4) 시험성적서	: 시험완료 후 2주 이내

5) 준 공 도 서	: 3부

6) 사  진  첩	: 2부

7) CD ROM	: 2매 (준공도서 및 사진 등 관계 자료)