[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-21

담당부서

작성자

(문화재보존국 / 수리기술과)

(송봉규/042-481-4873/

kty1@ocp.go.kr)

정 책 명

숭례문 복구 및 성곽복원공사

사업개요

및

추진경과

○ 사업목적

- 화재로 훼손된 숭례문의 복구를 통해 국민의 상실감 치유

- 숭례문 중건과 변천과정 등을 면밀히 고증조사하고 일제 강점기 훼손되기 전의 옛 모습대로 복구

○ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 12월 ～ 2013년 6월

- 사업내용 : 숭례문 문루 복구, 성곽 복원, 주변 정비 등

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사 업 비 : 154억원

- 시 공 사 : 명헌건설(주)

○ 추진경과 및 계획

- 숭례문 복구설계 : ‘08. 12월 ~ ‘09. 11월(우리건축사사무소)

- 숭례문 복구

․ 문루 해체 및 조립('10.1~'13.2) / 전통기와 제작('10.3~'11.11)

․ 기와잇기('12.6~'12.11) / 단청('11.11~'12.12, 준비기간 포함)

- 성곽복원 총 69m (동측 53m, 서측 16m)('10.3~'13.2)

- 방재시설 설치('12.12~'13.4)

- 경관조명 설치('11.1~'13.4)

- 자재정리 및 서류정리(‘13.5~’13.6)

※ 화재수습('08.2~'08.5), 복구 준비('08.6~'09.11) 단계 선행

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 조규형(시설주사)

- 최종 결재자 : 이건무(문화재청장)

○ 사업 관련자(준공 당시 기준)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	변영섭	차관급	‘13. 3 ~ 11월	청 업무 총괄
차장	박영대	별정직 고위공무원	‘13.3 ~ ’14.3월	청 업무 부총괄
국장	강경환	일반직 고위공무원	‘13. 3 ~ 현재	국 업무 총괄
과장	박왕희	4급	‘11.2 ~ ’13.10월	과 업무 총괄
사무관	이정연	5급	‘08.5 ~ ’13. 6월	숭례문 업무 총괄
사무관	조규형	5급	‘08.5 ~ ’13. 6월	숭례문 공사 담당
주무관	송봉규	6급	‘08.5 ~’13. 3월	숭례문 공사 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 숭례문 복구 자문위원단

- 박언곤, 장경호, 김동현, 윤홍로, 김동욱, 장석하, 손영식, 김정기, 이호관, 정대기, 김주태, 노삼규, 김용달, 김태환, 백민호, 이재은

ㅇ 숭례문 복구 참여 장인

- 신응수(대목장), 홍창원(단청장), 이의상(석장), 이재순(석장), 이근복(번와장), 한형준(제와장)

추진실적

ㅇ 2009.12.17 : 공사 계약

ㅇ 2010.02.10 : 착공식

ㅇ 2012.03.08 : 상량식

ㅇ 2012.06.04 : 성곽 축성식

ㅇ 2013.05.04 : 준공식

ㅇ 2013.06.30 : 공사 준공