정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	창덕궁관리소	②담당자 (연락처)	류근식 소장 (02-3668-2300) 이송이 주무관 (02-3668-2309)
③정책사업명	창덕궁 주합루 권역 보수 및 주변정비 공사
④선정기준	5억 이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	‘14.4월 ~ ’15.9월
⑥주요내용	□ 사업목적 ○ 주합루 권역 서향각, 희우정 보수 및 주변 노후 담장 등을 정비하고자함 □ 공사개요 ○ 공 사 명 : 창덕궁 주합루 권역 보수 및 주변 정비공사 ○ 공사금액 : 1,117,379천원 - 건축공사 : 1,096,590천원 - 폐기물처리 : 20,789천원 ○ 공사기간 : ‘14.4월 ~ ‘15.9월(12개월) ○ 공사내용 - 서향각(128.5㎡) 해체 보수, 희우정(12.65㎡) 지붕 보수, 주합루 주변 담장 해체 및 보수, 주합루 앞 어정 보수, 주합루 주변 위험수목 정비 □ 추진상황 및 향후계획 ○ 설계용역 시행 : ‘13.5월~9월 ○ 전문가 자문회의 개최 : ‘13.8월 ○ 문화재위원회 사적분과 보고(원안접수) : ‘14.1월 ○ 공사 발주 : ‘14.3월 ○ 고건물 해체, 어정정비, 담장공사 : ‘14.5월~11월 ○ 고건물 목공사, 지붕공사 및 주변정비 : ‘15.3월~9월