정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

세종대왕유적관리소

②담당자

(연락처)

이승환 소장

(031-885-3122)

오효석사무관

(031-885-3123)

③정책사업명

영·영릉 유적 종합정비사업

④선정기준

5억이상 대규모 예산이 투입되는 사업

⑤사업기간

2014~2019

⑥주요내용

□ 사업 개요

○ 조선왕릉 세계유산 등재에 따른 보존·관리 후속  이행조치      계획 등의 일환으로 기본 능제를 원형·복원하고, 전시관      건립 등 영․영릉(英․寧陵)에 대한 종합적인 정비 추진

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2014~2019년(6년간)

○ 소요재원 : 총288억원

○ 사업내용

- (가칭)세종대왕역사전시관 건립 및 주차장 조성(25,975㎡)

- 영릉(寧陵) 매표소 건립 및 주차장 조성(2,711㎡)

- 영릉(英陵) 능제 복원 및 정비 공사(116,595㎡)

- 영릉(寧陵) 능제 복원 및 정비 공사(10,929㎡)

□ 단계별 분류

구분		세부사업내용	비고
1 단 계	英陵	ㅇ (가칭)세종대왕역사전시관 건립 ㅇ 전시관 부지내 주차장 조성 및 야외화장실 건립 ㅇ 정문 및 수표소 건립	141억원
	寧陵	ㅇ 현 영릉(寧陵) 광장, 주차장 해체 및 조경정비 ㅇ 영릉(寧陵) 매표소, 화장실 건립 및 주차장 조성 ㅇ 기존 시설물 철거(매표소, 화장실, 담장 등)
2 단 계	英陵	ㅇ 신성림 조성, 소하천정비, 기존 건축물 철거 등 - 원형이 아닌 시설물(세종전, 관리사무소, 매점 등) 철거 - 현 영릉(英陵) 광장 및 주차장 해체 복원 (위토답, 조경정비, 관람편의시설 등) - 옛 소하천(550m) 선형을 최대한 살려 하천정비 ㅇ 영릉(英陵) 능제 복원·정비 - 변경되기 이전의 지형을 최대한 살려 원형복원․정비 - 변경 훼손된 지장물 철거 (능침계단, 변형참도, 박석, 홍살문, 훈민문, 정문,포장시설 등) - 발굴조사결과 확인된 참도, 어구, 홍살문, 연지, 재실 복원	147억원
	寧陵	ㅇ 영릉(寧陵) 능제 복원 - 발굴조사결과 확인된 연지 복원

□ 추진상황

○ 기본계획 수립 : ‘14.3.28

○ 조달청 계약 의뢰 : ‘14.4.9