정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	조선왕릉관리소	②담당자 (연락처)	김정남 소장 (02-3700-1800) 손수현 주무관 (02-3700-1832)
③정책사업명	태릉 클레이사격장 철거지역 능제복원공사
④선정기준	5억이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	‘13. 9 ~ ’16. 11
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 서울 태릉과 강릉 내 위치한 태릉 클레이사격장의 토양오염 정화사업을 완료하고, 훼손된 클레이사격장 철거지역을 조선 왕릉의 역사경관에 부합되도록 능제를 복원하고자 함 □ 사업내용 ○ 대 상 : 태릉 북서측 (구)클레이사격장 부지 77,423㎡ ○ 내 용 : 매립폐기물처리, 조경공사(지형복구, 수목 벌채·식재 등), 조경공사 폐기물 처리 ○ 기 간 : 2013년 9월 ~ 2016년 11월 ○ 예 산 : 총 32.7억원(‘13년 4.6억/ ’14년 8.1억/ ‘15년 13억/’16년 7억) - 매립폐기물처리 : 12.7억원 - 조경공사(지형복구, 수목벌채·식재 등) : 18.5억 - 조경공사 폐기물 처리 : 1.5억 □ 추진 상황 및 향후계획 ○ 매립폐기물 처리(1차) : ‘13.9월 ~ ’13.12월 ○ 매립폐기물 처리(2차) : ‘14.2월 ~ ’14.8월 ○ 능제복원 폐기물처리 : ‘14.11월 ~ ’14.12월 ○ 조경공사 및 폐기물처리 : ‘15.3월 ~ ’16.11월